51	소규모 마을단위 축산 부산물 재활용센터 건립					공약 번호	22
담당부서	농업축산과장 황창령 축산정책팀장 이 욱 담당자 양은정(☎5742)
사업구분	신규◻ 계속◼		완료/지속	임기 내 완료 ◻ 임기 후 지속 ◼	재원구분	◼국비 ◼도비 ◼군비 ◼기타
목표		◦ 축산농가 부숙 중기 이상 퇴비를 받아 저장하여 공동으로 자원화하고 부숙이 완료된 가축분 퇴비를 농경지로 환원

□ 사업개요(공모사업)

□ 사 업 명 : 마을형 퇴비저장시설 지원사업

□ 사업기간 : 2024년 ~ 2025년

□ 사 업 비 : 10억원 이내 / 개소(국비 4, 군비 3, 융자 3)

□ 설치유형(퇴비저장시설 300백만, 고체연료 400백만, 바이오차 700백만)에 따라 총사업비 상이

□ 사업내용

□ 지원대상 : 퇴비유통전문조직, 농·축협, 농업법인 등

□ 사 업 량 : 1개소

□ 지원내용 : 퇴비저장시설, 고체연료·바이오차 생산시설

※ 퇴비저장시설 단독 지원은 지원대상에서 제외

□ 문제점 및 대책

□ 가축분뇨처리지원(마을형 퇴비저장시설) 사업 지침개정으로 퇴비저장시설 단독 지원 제외

□ 가축분뇨 또는 퇴비를 활용하여 가축분 고체연료 또는 바이오차 생산시설을 반드시 병행하여 추진

□ 현재 바이오차는 사업성 및 판로확보 부족으로 사업대상자 모집이 어려운 상태이며, 경제성에 대해 면밀한 검토 필요

※ 인근 시·군에서도 바이오차 경제성 부족으로 2022년 사업을 포기한 상태임

□ 추진계획

□ ‘23. 10 ~ 12. : 2024년 예비사업자 모집

□ ‘24.  1.~ 12.  : 사업 추진 및 정산

□ 공약이행지표

지표명	단위	목표	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	이행율(%)
공모사업 수요조사	식	1						-
공모사업 선정	식	1						-
사업추진	개소	1						-
2022년 9월 말 기준 공약 이행률								-

□ 투자(확보)계획 / 집행액 (단위:백만원)

구분		총사업비	기투자	임기 내 투자계획					향후
				‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
투자계획	계	1,000	0	0	0	500	500	0	0
	국 비	400				200	200
	도 비	0
	군 비	300				150	150
	기 타	300				150	150
집행액		0