25	완도형 고령자 복지주택 건립					공약 번호	31
담당부서	가족행복과장 박미정 복지시설팀장 김영지(☎5320)
사업구분	신규◻ 계속◼		완료/지속	임기 내 완료 ◻ 임기 후 지속 ◼	재원구분	◼국비 ◻도비 ◻군비 ◼기타
목표		◦고령자를 위한 맞춤형 주택을 건립하여 상층부에 안심주택을 운영하고 저층부에 케어 프로그램 등을 추진하는 완도형 고령자복지주택 건립

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2021. 5월 ~ 2026. 6월

□ 사업예정지 : 전라남도 완도군 완도읍 중도리 760-1번지 일원

□ 사 업 비 : 49,220백만원

□ 사업규모

□ 공동주택(100호이내) - 독거형(29㎡/9.6평), 부부형(58㎡/17.5)

□ 사회복지시설 1,200㎡

□ 사업시행 : 완도군, LH공사

□ 추진현황

□ ’21. 05. : 완도형 고령자 복지주택 연구용역 착수

□ ’21. 08. : 완도형 고령자 복지주택 부지선정 관련실과 협의

□ ’21. 09. : 완도형 고령자 복지주택 연구용역 완료

□ ’21. 10. : 고령자 복지주택 공모사업 심의

□ ’21. 12. : 고령자 복지주택 공모사업 확정 ※국토교통부

□ ’22. 04. : 고령자 복지주택 부지 면적 변경(경계측량)

□ (당초)12,231㎡→(변경)6,873㎡ ※ 5,358㎡ 감소(다도해상국립공원사무소 건립)

□ ’22. 07월 : 고령자 복지주택 가배치 및 사업성 분석 ※LH공사

□ 향후 추진계획

□ ’22. 12. : 완도군 & LH토지주택공사 기본 협약

□ ’23. 02. : 고령자 복지주택 설계용역 공모, 각종 인허가 추진

□ ’23. 07. : 완도형 고령자 복지주택 사업승인신청 ※국토교통부

□ ’24. 10. : 완도군 & LH토지주택공사 실시협약

□ ’24. 12. : 완도형 고령자 복지주택 착공 ※LH시행

□ ’26. 06. : 완도형 고령자 복지주택 준공

□ 공약이행지표

지표명	단위	목표	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	이행율(%)
협약체결	건	1	-	-	-	-	-	-
기본 및 실시설계	건	1	-	-	-	-	-	-
고령자 복지주택 건립 공정	%	100	-	-	-	-	-	-
2022년 9월 말 기준 공약 이행률								-

□ 투자(확보)계획 / 집행액                             (단위:백만원)

구분		총사업비	기투자	임기 내 투자계획					향후
				‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
투자계획	계	49,220	20		810	420	12,390	12,390	23,190
	국 비
	도 비
	군 비	13,670	20				6,825	6,825
	LH공사	35,550			810	420	5,565	5,565	23,190
집행액		20	20