21	돌봄 가족센터 건립					공약 번호	40
담당부서	주민복지과장 고영상 여성복지팀장 정계창 담당자 정계창(☎5290)
사업구분	신규◼ 계속◻		완료/지속	임기 내 완료 ◼ 임기 후 지속 ◻	재원구분	◼국비 ◻도비 ◼군비 ◻기타
목표		◦가족센터 조성 후 다함께 돌봄센터로 활용, 사람이용 중심의 생활환경 기반시설을 통한 주민 삶의 질 향상

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2021년 ~ 2023년

□ 사 업 비 : 6,000백만원(국비 1,500, 군비 4,500)

□ 사업규모 : 지상 5층 / 연면적 1,998㎡

□ 사업내용 : 다함께돌봄, 다목적 가족소통공간, 도서관 및 체험실,

공동육아나눔터, 사무실, 회의실 및 교육실, 요리교실 등

□ 추진상황

□ ‘20. 10. : 2021년 생활SOC 복합화 공모사업 선정

□ ′20. 07. : 완도군 중기 지방재정계획 및 투자심사 완료

□ ′21. 08. : 공공건축 사업계획 사전검토 및 심의 완료

□ ′22. 09. : 기본 및 실시 설계용역 보완 검토

□ 향후 추진계획

□ ′22. 10. : 기본 및 실시 설계용역 완료

□ ′22. 10. : 장애물 없는 생활환경(BF) 및 제로에너지 건축물 인증

□ ′22. 10. : 전남도 계약심사

□ ′22. 12. : 건축공사 착공

□ ′23. 09. : 건축공사 준공

□ ′23. 10. : 개관 예정

□ 공약이행지표

지표명	단위	목표	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	이행율(%)
실시설계 진행율	%	100	100	-	-	-	-	100
공사 진행율	%	100	-	-	-	-	-	-
2022년 9월 말 기준 공약 이행률								-

□ 투자(확보)계획 (단위:백만원)

구분		총사업비	기투자	임기 내 투자계획					향후
				‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
투자계획	계	6,000	0	250	4,500	1,250	0	0	0
	국 비	1,500	-	-	1,125	375			-
	도 비	0	-	-					-
	군 비	4,500	-	250	3,375	875			-
	기 타	0	-	-					-
집행액		0