80	완도 제1부두 침수예방사업					공약 번호	52
담당부서	건설과장 차재철 하천관리팀장 김봉현 담당자 임형주(☎5217)
사업구분	신규◼ 계속◻		완료/지속	임기 내 완료 ◼ 임기 후 지속 ◻	재원구분	◼국비 ◻도비 ◼군비 ◻기타
목표		◦대조기 해수면 상승에 따른 완도항 1부두 상습침수구역에 대해 군민의 생명과 재산보호를 위해 침수 원인 분석 등 근본적 대책을 마련하여 행정안전부, 해양수산부 등 중앙부처에 지속적 건의 추진

□ 추진배경

□ 대조기 해수면 상승에 따른 완도항 1부두 상습적인 침수발생으로 3가구 주택 및 도로 침수로 주민 통행 불편과 주택피해 발생 우려됨

□ 1부두는 매립층(사석)으로 이루어져 콘크리트 균열 보강 및 측구인상 만으로 고조위 시 침투수 경로 완전 차단 불가능

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2023. ~ 2025.

□ 사 업 비 : 3,269백만원(국비 1,635 군비 1,634)

□ 사업내용 : 완도읍 군내리 1291, 1299, 1300번지 3가구 이주

□ 추진현황

□ ’20.  6. ~ ’22.  12. : 자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역 중

□ ’20.  6. : 이주(토지, 건물) 대책에 따른 주민 동의서 징구

□ ’22. 1. : 전남도 해양수산국 해운항만과 완도항관리팀 방문 건의

□ ’22. 4. : 전남도 해양수산국 해운항만과 방문 건의

□ ’22. 6. : 전남도 상습침수발생(1부두)에 따른 대책 요청

□ 완도항 관리청인 전남도에서 구조적인 대책 강구

□ 향후 추진계획

□ ’23.  6. : 자연재해위험개선지구 지정 고시

□ ’24. 6. : 침수피해 3가구 이주 추진(예정)

□ 행정안전부, 해양수산부, 전남도 등 지속적인 방문 건의

□ 지반정밀안전진단 용역 발주 예정(전남도 해운항만과)

□ 항구적인 침수예방사업 추진

□ 공약이행지표

지표명	단위	목표	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	이행율(%)
재해위험지구 지정	%	100						-
침수가구 보상 이전	%	100						-
2022년 9월 말 기준 공약 이행률								0

□ 투자(확보)계획 / 집행액 (단위:백만원)

구분		총사업비	기투자	임기 내 투자계획					향후
				‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
투자계획	계	3,269	0	0	1,090	1,090	1,089	0	0
	국 비	1,635			545	545	545
	도 비	0
	군 비	1,634			545	545	544
	기 타	0
집행액		0

□ 위치도

□ 현장사진