74	원도심 도시재생사업 추진					공약 번호	55
담당부서	지역개발과장 천종실 도시재생팀장 이정국 담당자 주정화(☎5603)
사업구분	신규◻ 계속◼		완료/지속	임기 내 완료 ◻ 임기 후 지속 ◼	재원구분	◼국비 ◼도비 ◼군비 ◻기타
목표		◦ 쇠퇴한 원도심과 취약지역에 대한 상권활성화, 주거환경 개선을 통해 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

□ 위    치 : 완도읍 군내리 일원(중앙·주도·서성·용암리)

□ 공모선정 ┏ 일반근린형 : 중앙마을(중앙·주도·서성·용암리) / 134억원

┣ 인 정 사 업 : (구)문화원·노두 공영주차장 / 114억원

┣ 새 뜰 마 을 : 항동리, 성내·남성리 / 86억원

┣ 예비사업 : 금일화목 / 4억원

┗ 지역수요맞춤지원 : 완도노두리 / 25억원

□ 공모추진 ┏ 일반근린형 : 금일 화목지구 / 166억원

┣ 새 뜰 마 을 : 완도남향리  / 43억원

┗ 인정사업 : 구) 소방서  / 50억원

□ 추진상황

□ 뉴딜사업(완도 중앙지구)

□ ’22.  6. : 중앙시장 A동 신축공사 공공건축심의

□  ’22. 7. : 구 대중병원 힐링정원 실시설계 완료

□ 인정사업(구, 문화원)

□  ’22. 3. : 주민역량강화 교육 시행

□  ’22. 8. : 리모델링 실시설계 완료

□ 인정사업(노두 공영주차장)

□  ’22.  4. : 공공건축 사전검토 용역착수

❍ 예비사업(금일 화목리)

□  ’22.  4. : 행복키움쉼터 실시설계 완료

□  ’22. 7. : 행복키움센터 공사 착공

❍ 취약지역개조사업(완도 항동)

□ ‘22. 7. : 집수리 실시설계 완료 후 자부담 부과(42개소)

□ ‘22. 8. : 생활인프라 실시설계 완료

❍ 취약지역개조사업(완도 성내ㆍ남성)

□ ‘21. 9. : 마스터플랜 용역 착수

□ ‘22. 6. : 집수리사업 수요조사(36개소)

❍ 지역수요맞춤사업(완도 노두)

□ ‘22. 3. : 구역지정 및 실시설계 용역 착수

□ ‘22. 9. : 도시재생대학 운영

□ 향후 추진계획

《선정사업》

❍ 뉴딜사업(완도 중앙지구)

□ ’22. 10. : 중앙시장 A동 철거완료

□ ’22. 10. : 구 대중병원 힐링정원 조성공사 착수

❍ 인정사업(구, 문화원)

□ ’22. 10. : 주민역량강화교육 총괄발주

□ ’22. 10. : 청소년플랫폼 리모델링 착수

❍ 인정사업(노두 공영주차장)

□ ’22. 10. : 설계공모 및 실시설계 착수

□ ’23.  4. : 공사착수

❍ 예비사업(금일 화목리)

□ ’22. 10. : 공사완료

□ ’22. 12. : 주민역량강화 후 운영관리

❍ 취약지역개조사업(완도 항동)

□ ‘22.  9. : 집수리 공사 착수

□ ‘22. 10. : 생활인프라 공사 착수

❍ 취약지역개조사업(완도 성내ㆍ남성)

□ ‘22. 10. : 마스터플랜 승인

□ ‘22. 10. : 마을안전도로 공사착수

❍ 지역수요맞춤지원사업(완도 노두)

□ ‘22. 11. : 구역지정 및 실시계획 인가 완료

□ ‘23.  1. : 공사 착수

《22년 공모계획》

❍ 뉴딜사업(금일 화목지구)

□ ’22.   9. : 공모신청서 제출 후 대면·서면 평가

□ ’22.  10. : 주민공청회·의회의견청취

❍ 인정사업(구, 소방서)

□ ’22.  9. : 국토교통부 방침변경으로 ’22년 공모신청 제외

❍ 취약지역개조사업(완도 남향)

□ ‘22.  9. : 기본계획 용역발주

□ ‘22. 12. : 공모사업 신청(국가균형위)

□ 공약이행지표

지표명	단위	목표	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	이행율(%)
주민 및 경제주체 협의체 구성	건	5	-					-
주민역량강화 교육 실시	건	5	2					46
구도심 개발사업 공모 선정	건	5	-					-
2022년 9월 말 기준 공약 이행률								15

□ 투자(확보)계획  (단위 : 억원)

구분		총사업비	기투자	임기 내 투자계획					향후
				‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
투자계획	계	53,717	6,700	6,600	16,966	14,351	8,600	500
	국 비	36,610	5,000	5,000	12,966	8,644	5,000	0
	도 비	4,900	600	600	2,000	500	700	500
	군 비	11,129	1,000	1,000	2,000	4,229	2,900	0
	기 타	1,078	100	0	0	978	0	0

집행액	363	363	0

□ 세부 사업내용(선정사업)

사 업 명	위 치	사업기간	사업비 (억원)	사 업 내 용	비 고
계	7개소	’20~’24	363
도시재생뉴딜사업	완도읍 원도심	’21~’24	134	∘ 장보고존(상권활성화) - 주민공동판매장 - 중앙시장활성화 - 역사문화테마거리 ∘ 미소로존(정주환경 개선) - 주택정비사업 - 스마트 생활공간구축 ∘ 해치유존(공동체 활성화) - 행복어울림센터 - 힐링오픈스페이스 조성	국토부
도시재생 인정사업	완도읍 구)문화원	’20~’22	40	∘ 어린이 플랫폼 조성 - 어린이 상상놀이터(1층) - 감성치유실(2층) - 커뮤니티 및 힐링북카페(3층) - 옥상 우드테라스(옥상층) ∘ 별빛공원 및 산책로 조성	국토부
도시재생 인정사업	완도읍 노두공영주차장	’22~’24	74	∘ 행복충전소 조성 - 어린이놀이 및 돌봄공간 - 마을사랑방, 주민쉼터 ∘ 주차타워 조성 - 주차장 212면	국토부
예비사업	금일읍 화목리	’22~’22	4	∘ 행복키움쉼터 조성 - 어린이놀이 및 돌봄공간 ∘ 주민역량강화 - 마을기업육성 - 프로그램 운영	국토부

사 업 명	위 치	사업기간	사업비 (억원)	사 업 내 용	비 고
새뜰마을사업 (취약지역 생활여건 개조사업)	완 도 읍 항 동 리	’20~’23	43	∘ 안전확보 - 재해방지/방범시설/보행환경 ∘ 생활인프라 - 소통길/위생 및 주민편의시설 ∘ 휴먼케어 ∘ 주택정비 지원 - 노후주택정비 - 슬레이트처리 - 빈집정비	균형위
새뜰마을사업 (취약지역 생활여건 개조사업)	완 도 읍 성내·남성	’21~’24	43	∘ 안전확보 - 재해방지/방범시설/보행환경 ∘ 생활인프라 - 소통길/위생 및 주민편의시설 ∘ 휴먼케어 -커뮤니티센터, 순환형임대주택 ∘ 주택정비 지원 - 노후주택정비 - 슬레이트처리 - 빈집정비	균형위
지역수요 맞춤지원사업	완 도 읍 노 두 리	’22~’24	25	∘ 생활복지 환경개선사업 - 골목확장·쌈지공원 - 고령친화보행환경개선 - 악취공간 정비 - 주민커뮤니티 플랫폼 ∘ 관광경관 창의문화사업 - 주민역량 프로그램 - 커뮤니티 플랫폼 콘텐츠 개발	국토부