60	여객선 야간운항 확대					공약 번호	56
담당부서	해양정책과장 김현란 해양관리팀장 황 춘 담당자 이령경(☎5132)
사업구분	신규◼ 계속◻		완료/지속	임기 내 완료 ◻ 임기 후 지속 ◼	재원구분	◻국비 ◻도비 ◼군비 ◻기타
목표		◦ 섬 주민의 교통편익 증대 및 정주여건 개선 ◦ 방문객 체류시간 및 방문자 증가를 통한 섬 경제 활성화

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022 ~ 계속

□ 사 업 비 : 5,379백만원(군비)

□ 사업내용

□ 운영지원금(인건비, 유류비) / 연 800백만원

□ 시설비(등부표 설치, 양식시설물 철거, 조명 설치 등) / 1,780백만원

□ 운항구간 : 완도(화흥포항) ⇔ 노화(동천항) ⇔ 소안항

□ 운항횟수 : 1일 1회 / 화흥포항 왕복(21:00~23:00)

□ 운항선사 : 소안농협

□ 지금까지 추진상황

□ ’22. 1. 14. ~ 2. 26. : 야간운항 원가산정 용역

□ ’22. 2. 17. : 항로 사전점검(목포청, 운항관리센터, 완도군)

□ ’22. 3. 2. : 항로 내 양식시설물 현황 조사(완도군/해당 어촌계)

□ ’22. 3. 16 ~ 3. 17. : 제1차 주민간담회(이목·충도·구도 어촌계)

□ ’22. 4. 12. ~ 5. 11. : 항로 내 양식시설물 어장측량 조사 용역

□ ’22. 4. 15. ~ 5. 9. : 접안장 조명시설 설치(화흥포항, 동천항, 소안항)

□ ’22. 6. 8. : 제2차 주민간담회(이목·월항·구도 어촌계)

□ ’22. 6. 23. ~ : 등부표 설치 공사 실시설계 용역

□ ’22. 7. 28. : 제3차 주민간담회(충도어촌계)

□ 향후 추진계획

□ ’22. 6. ~ 10. : 항로 점검 결과 지적사항 보완

□ 항로 내 양식시설물 철거 및 이설

□ 야간운항 항로 등부표 설치: 22개(설치 18, 예비품 4)

□ ’22. 11. : 야간운항 협약 체결(완도군 ⇔ 소안농협)

□ ’22. 11. : 야간운항 허가 신청(소안농협→목포지방해양수산청)

□ ’22. 12. : 야간운항 개시(예정)

□ 공약이행지표

지표명	단위	목표	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	이행율(%)
인허가 제반사항 이행 (등부표 설치, 양식시설물 철거 등)	건	3	1					33
야간운항 운영지원	%	100	-					-
2022년 9월 말 기준 공약 이행률								17%

□ 투자(확보)계획 / 집행액 (단위:백만원)

구분		총사업비	기투자	임기 내 투자계획					향후
				‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
투자계획	계	5,379	0	1,991	697	897	897	897	0
	국 비	0
	도 비	0
	군 비	5,379		1,991	697	897	897	897
	기 타	0
집행액		44.2		44.2