44	생활체육공원 조성					공약 번호	57
담당부서	체육진흥과장 최광윤 체육시설팀장 김상균 담당자 조은진(☎5417)
사업구분	신규◻ 계속◼		완료/지속	임기 내 완료 ◻ 임기 후 지속 ◼	재원구분	◼국비 ◻도비 ◼군비 ◻기타
목표		◦군민 생활체육 활동 기회를 균등하게 제공하고 지역주민과 스포츠 동호인들의 생활체육 활성화로 주민화합과 건강증진에 기여

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2019 ∼ 2026

□ 사 업 비 : 17,600백만원(국비 5,280, 군비 12,320)

□ 사업내용 : 생활체육공원 조성 5개소

□ 보길 생활체육공원 조성 : 3,400백만원(국 1,020 군 2,380)

□ 고금 생활체육공원 조성 : 3,400백만원(국 1,020 군 2,380)

□ 소안 생활체육공원 조성 : 1,800백만원(국 540  군 1,260)

□ 금일 생활체육공원 조성 : 5,000백만원(국 1,500 군 3,500)

□ 약산 생활체육공원 조성 : 4,000백만원(국 1,200 군 2,800)

□ 추진상황

□ 공사중

□ 보길 생활체육공원 조성 : 2022년 마무리

□ 고금 생활체육공원 조성 : 2023년 마무리

□ 진행중

□ 소안 생활체육공원 조성 : 2023년 예산반영

□ 계획중

□ 금일 생활체육공원 조성 : 토지미확보

□ 약산 생활체육공원 조성 : 토지미확보

□ 향후 추진계획

□ ’22. 12. : 보길 생활체육공원 준공(본부석, 야간조명, 어린이놀이시설 등)

□ ’23. 12. : 고금 생활체육공원 준공(운동장, 다목적구장, 어린이놀이시설 등)

□ ’24.  6. : 소안 생활체육공원 준공(운동장, 어린이놀이시설 등)

□ ’25.  1. ~ 26. 12. : 금일, 약산 생활체육공원 사업 추진

□ 공약이행지표

지표명	단위	목표	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	이행율(%)
보길 생활체육공원 착공 및 준공	식	1	1					100
고금 생활체육공원 착공 및 준공	식	1	1					50
소안 생활체육공원 준공	식	1
금일, 약산 생활체육공원 부지확보	식	1
금일, 약산 생활체육공원 공모 및 실시설계	식	1
금일, 약산 생활체육공원 착공 및 준공	식	1
2022년 9월 말 기준 공약 이행률								25

□ 투자(확보)계획 / 집행액 (단위:백만원)

구분		총사업비	기투자	임기 내 투자계획					향후
				‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
투자계획	계	17,600		3,400	3,400	1,800	5,000	4,000	0
	국 비	5,280		1,020	1,020	540	1,500	1,200
	도 비	0
	군 비	12,320		2,380	2,380	1,260	3,500	2,800
	기 타	0
집행액		0