68	도서지역 식수난 해소 대책 추진					공약 번호	58
담당부서	환경수질관리과장 이기석 상수도팀장 오영호 담당자 김기수(☎5785)
사업구분	신규◻ 계속◼		완료/지속	임기 내 완료 ◼ 임기 후 지속 ◻	재원구분	◼국비 ◼도비 ◼군비 ◻기타
목표		◦광역상수도 미공급 지역인 도서지역의 식수난 해소

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2019 ~ 2026(8년)

□ 사 업 비 : 123,913백만원

□ 노화 보길 광역상수도 해저관로 사업 : 67,900백만원(2단계 40,000백만원)

□ 기타 도서지역 식수원 개발사업 등 : 49,752백만원

□ 추진상황

□ 노화 보길 광역상수도 해저관로 사업

□ 전라남도(물환경과) 환경부(물이용계획과) 사업추진 방법 등 협의 중

□ 부용제 숭상 확장 또는 2차 해저관로 사업 추진 검토

➡ 10월중 환경부 『완도군 수도정비 기본계획(부분변경)』 승인신청

□ 도서지역 식수원 개발사업 : 3개소 준공, 2개소 추진중

(단위: 백만원)

위 치	사 업 량	사업기간	사업비	비고
계	5개소		22,337
금일 충 도	해저1.90km, 육상 1.87km	‘20.1~’21.12	4,919	사업완료
금일 신 도	해저1.75km, 육상 1.14km	‘20.1~’21.12	3,910	사업완료
군외 사후도	해저1.82km, 육상 1.83km	‘20.1~’21.12	4,595	사업완료
소계	3개소		13,424
군외 고마도	해저1.84km, 육상 0.87km	‘22.1~’23.12	4,913	추 진 중
고금 넙 도	해저1.20km, 육상 0.20km	‘22.1~’24.02	4,000	추 진 중
소계	2개소		8,913

□ 보길 지하수 저류지 설치사업 : 공정율 65%(한국수자원공사 위탁공사)

□ 사 업 비 : 5,473백만원 (국비 3,83170%,  군비 1,64230%)

□ 사 업 량 : 지하수차수벽 (L=257m, H=1~6m), 지하수저류조 (1,500㎥)

* 집수매거(L=90.0m), 취수펌프(45kW, 2대), 관측정(2개소) - 공정율 65%

* 1일 1,100톤 취수(8시간기준, 최대 3,300톤 취수 가능)

□ 사업준공 :  ’23. 01. ~ 02. 시설물 이관 (환경부→완도군)

□ 사업추진 문제점 : 취수관 하천 부분매설 관로 사용 강우시 파손 우려

- 임시관로(D300mm, 1.5km) 보수정비 추진

- 안정적인 지하 취수관로 사업 추진 (2024년 환경부 국비 보조사업)

□ 노화읍 넙도 해수담수화 시설공사

□ 사 업 비 : 2,000백만원 (인구소멸대응기금 15억, 도비 5억원)

□ 사 업 량 : 해수담수화 시설 200톤/일, 해수취수 관정 개발 1식

□ 사업기간 : 2022~2023

* ’22. 10.~ 12. : 해수담수화 시설 기본 및 실시설계

□ 금일읍 동백리 수원지 개발사업

□ 사 업 비 : 24,900백만원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)/도서개발식수원개발사업

□ 사 업 량 : 수원지신설(308천톤, 가압장 1개소, 관로 5.9km)

□ 사업기간 : 2023~2026

□ 공약이행지표

지표명	단위	목표	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	이행율(%)
사업비 집행율	%	100	13.2	-	-	-	-	13.2
2022년 9월 말 기준 공약 이행률								13.2

□ 투자(확보)계획 (단위:백만원)

구분		총사업비	기투자	임기 내 투자계획					향후
				’22	’23	’24	’25	’26
투자계획	계	123,913	16,118	3,642	6,369	5,300	33,074	33,063	26,347
	국 비	77,674	12,770	830	3,290	3,710	20,155	20,156	16,763
	도 비	17,041	1,181	27	219	396	5,587	5,580	4,051
	군 비	29,198	2,167	2,785	2,860	1,194	7,332	7,327	5,533
	기 타
집행액		16,118	16,118