67	국립난대수목원 조기 조성					공약 번호	71
담당부서	환경산림과장 박은재 산림녹지팀장 김경곤 담당자 김동현(☎5525)
사업구분	신규◼ 계속◻		완료/지속	임기 내 완료 ◻ 임기 후 지속 ◼	재원구분	◼국비 ◻도비 ◻군비 ◻기타
목표		◦ 국가의 집중적인 투자를 통한 동북아시아 대표 국립난대수목원 조성으로 기후변화 대응 및 역사, 문화, 생태자원을 활용한 해양관광 거점도시로 도약

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2022 ~ 2026년

□ 사 업 비 : 1,475억원(국비 100%)

□ 사업내용 : 381ha 5개 권역 구성

□ 보전·복원지구 : 전망대, 숲속카페, 트리탑에코로드, 난대림교육지원숲 등

□ 연구·시험지구 : 난·아열대림연구동, 전시 및 증식온실, 힐링푸드센터 등

□ 전시·관람지구 : 교육특화주제원(미로원, 어린이놀이학습원), 윈터가든 등

□ 서비스·교육지구 : 방문자센터, 산악열차탑승장, 가드닝실습장, 진입광장 등

□ 배후지원시설지구 : 유보지, 재료창고, 시설장비보관소 등

□ 추진현황

□ ’19. 05. : 전라남도, 완도수목원 국립난대수목원 후보지 확정

□ ’19. 07. ~ 09. : 국립난대수목원 유치 범국민 서명운동 전개

□ ’19. 10. : 산림청, 국립난대수목원 대상지 “적격” 통보

□ ’20. 12. : 국립난대수목원 대상지 확정

□ ’21. 10. : 국립난대수목원 관련 기관(산림청, 전라남도, 완도군) 업무협약 체결

□ ’21. 10. : 산림청, 예비타당성 조사 신청(기획재정부)

□ ’21. 12. : 기획재정부, 국립난대수목원 예비타당성조사 대상사업 선정

□ ’22. 04. : 국립난대수목원 토지교환 대상지 확정

□ ’22. 08. : 기획재정부 1차 경제성타당성 평가

□ 향후 추진계획

□ ’22. 10. : 국립난대수목원 예비타당성조사 결과 발표 예정

□ ’23. 01. : 기본 및 실시설계 용역 추진

□ 공약이행지표

지표명	단위	목표	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	이행율(%)
예비타당성조사 통과	%	100	80					80
기본계획 및 실시설계 완료	%	100						-
국립난대수목원 조성	%	100						-
2022년 9월 말 기준 공약 이행률								26

□ 투자(확보)계획 / 집행액 (단위:백만원)

구분		총사업비	기투자	임기 내 투자계획					향후
				‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
투자계획	계	147,500	0	0	600	3,200	4,700	33,000	106,000
	국 비	147,500	-	-	600	3,200	4,700	33,000	106,000
	도 비	0
	군 비	0
	기 타	0
집행액		0