39	장보고 성역화사업 및 법화사 재건					공약 번호	74
담당부서	문화예술과장 서길수 장보고선양팀장 황신우 담당자 김희라, 이경욱(☎5482)
사업구분	신규◻ 계속◼		완료/지속	임기 내 완료 ◻ 임기 후 지속 ◼	재원구분	◻국비 ◼도비 ◼군비 ◻기타
목표		◦ 장보고기념관 리모델링 및 청해진 1200주년 기념사업을 통한 장보고시대 개막

□ 사업개요

□ 사업기간 : 2021. 01. ~ 2028. 12.

□ 사 업 비 : 3,230백만원 (균특 1,040, 도비 140, 군비 2050)

□ 사업내용

□ 장보고기념관 리모델링 사업(2,600백만원 / 균특 1,040 군 1,560)

- 기념관 이동 동선, 전시 공간, 전시 조명, 영상물 제작 등의 리모델링 사업을 통해 최적의 전시환경 및 관람환경 조성

□ 법화사지 복토 및 정비(275백만원 / 도 110, 군 165)

- 완도법화사지는 전라남도 기념물 제131호로 지정된 문화유적으로써 유구훼손 방지 및 영구 보존 명령으로 현 위치에 복원 불가능

□ 법화사지 재건 기본계획 수립(50백만원)

- 법화사지 재건을 위한 기본계획 및 완도 군관리계획 결정(변경)안 수립에 따른 용역사업 추진

□ 추진현황

□ 장보고기념관 리모델링 사업

□ ‘22. 08. : 3차 추진상황보고회

□ ‘22. 09. : 최종보고회 및 실시설계

□ 법화사지 복토 및 정비

□ ‘22. 05. ~ 06. : 공사계약 및 착공

□ ‘22. 08. : 유구문화재 감리 실시

□ 향후 추진계획

□ 장보고기념관 리모델링 사업

□ ‘22. 11. : 준공 및 시범운영 실시

□ 법화사지 복토 및 정비

□ ‘22. 11. : 준공계획

□ 법화사지 재건 기본계획 및 군 관리계획 변경

□ ‘23. 03. : 기본계획 및 관리계획 변경

□ 공약이행지표

지표명	단위	목표	‘22	‘23	‘24	‘25	‘26	이행율(%)
기본 및 실시설계 용역	건	3	3					33%
사업공정률	%	100	30					30%
2022년 9월 말 기준 공약 이행률								32%

□ 투자(확보)계획 / 집행액 (단위:백만원)

구분		총사업비	기투자	임기 내 투자계획					향후
				‘22	‘23	‘24	‘25	‘26
투자계획	계	3,230	60	2,925	145	100	0	0	0
	국 비	1,040	-	1,040	-	-	-	-	-
	도 비	140	30	110	-	-	-	-	-
	군 비	2,050	30	1,775	145	100	-	-	-
	기 타	0	-	-	-	-	-	-	-
집행액		84.6	58.6	26